문서번호	교량보수과-8090
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
우창원		이수근	12/19 김만수
협조
	주무관		백운경

『마포대교(하류교) 정밀점검용역』결과 조치계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

서부도로사업소

(교량보수과)

정밀점검 용역결과 조치계획보고

[마포대교(하류교) 정밀점검용역]

2014년 사업으로 시행한 『마포대교(하류교) 정밀점검용역』을 완료하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 용역결과에 대한 조치계획을 수립 보고합니다.

Ⅰ		시설물 현황

시설명	마포대교	현 황 도
위치	서울시 마포구 마포동 ~영등포구 여의도동
규모	본선 연장 1,390m 램프 연장 375.5m
구조형식	Steel Box Girder
설계하중	DB-24
준공년도	2001. 07
시공사	현대건설

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 마포대교(하류교) 정밀점검용역

용역대상 : 마포대교(하류교)

용역기간 : 2014.4.2.~2014.10.28

용 역 비 : 62,671천원

용 역 사 : 대한민국상이군경회 대표 김덕남

Ⅲ		용역결과

상태평가 및 안전등급

시설물명	용 역 결 과		비 고
	상태평가	안전등급
마포대교(하류교)	B등급	B등급	2012년과 동일함.

주요 손상현황 및 상태등급

구분	손상 유형	단위	본 교	램 프			합계
				A	B	E
포장	망상균열	㎡	76			1	77
난간연석	균 열 (0.3㎜이상)	m	24				24
신축이음	누 수	m	19	9	2	1	31
바닥판	균 열 (0.3㎜이상)	m	10				10
	백태	㎡	22	2		1	25
거더외부	도장탈락 및 부식	㎡	56			1	57
거더내부	점검등고장/파손	개소	23				23
하부구조	균 열 (0.3㎜이상)	m	55	3		2	60
	박리	㎡	6				6
	망상균열	㎡	125		11		136
받침	받침부식	개소	4				4
	볼트부식	개소	9	10			19
상 태 등 급			B등급	B등급	B등급	B등급

책임기술자 종합의견

■ 각 부재별 상태는 대체로 양호, 일부 신규 손상이 발견되었으나, 기 조사시 일부 누락 및 공용기간중 콘크리트 구조물에 발생되는 일반적인 손상으로 손상정도가 경미한 수준으로 조사됨

■ 본 교량의 경우, 구조안전성에 영향을 미치는 보강이 필요한 부위 및 대통령령이 정하는 중대한 결함에 포함되는 손상은 없는 것으로 분석되었으며, 내구성 저하방지를 위한 보수가 필요한 상태로서 손상의 상태·효율성·경제성 등을 고려하여 보수방안을 제안하였음

■ 마포대교(하류교)의 현 상태는 사용성 및 안전성에 문제가 없는 상태이며, 효율적인 유지관리를 위하여 본 점검결과에 따라 보수를 실시하고 이후에 지속적인 점검이 이루어 진다면 교량의 공용에는 큰 문제가 없을 것으로 단단됨.

Ⅳ		조치계획

정밀점검 용역결과 주요 손상 중 보수 1순위에 대하여는 예산범위 내에서 2015년 한강교량 일상유지보수공사에 반영하여 정비하고 부족한 예산은 2016년에 반영하여 조치코자 함.

보수 2~3순위에 대하여는 추후 상태를 지켜본 후 보수계획을 수립코자 함.

붙임 : 1. 마포대교(하류교) 보수·보강 개략공사비 1부.

2. 마포대교(하류교) 정밀점검용역 외관조사망도 1부(별도)  끝.