문서번호	도로보수과-11417
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		12/19 이규철
협조
	주무관		이상하

2014년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사

작업지시(제7차) 기간연장 보고

2014.  12. 19(금)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사

작업지시(제7차) 기간연장 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

○ 시 공 사 : 해마건설(주) 대표 송흥섭

○ 도 급 비 : 211,112,250원

□ 보고내용

○ 중앙버스전용차로 기능개선사업 시행구간인 서울역 환승센터 안전유도블럭 정비공사와 관련하여, 최근 공사기간내 지속적인 한파로 인하여 작업기간내 공사시행이 어려운 실정임.

□ 조치계획

○ 시공품질 확보 및 원활한 공사진행을 위하여 공사기간을 연장하여 시행코자 함.

- 공 사 명 : 교통안전부속물 유지보수공사 제7차 작업지시(중앙버스전용차로 기능개선 사업)

- 개선내용 : 시각장애인용 안전유도블럭(점형, 선형) 교체

- 작업위치 : 서울역 환승센터 및 남대문(YTN앞) 중앙버스정류장 내

- 작업기간

· 당초 : 2014. 11. 11 ~ 2014. 12. 20

· 변경 : 2014. 11. 11 ~ 2015. 01. 10

- 작업공종

· 안전유도블럭(점형) 교체 : 2,066개

· 안전유도블럭(선형) 교체 : 1,918개.  끝.