함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2014년 관악 금천구 관내 상수도(송배수관, 시설물, 포장복구)공사 폐기물 처리용역)

우리사업소에서 시행중인 「2014년 관악 금천구관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장)공사 건설폐기물 처리용역」 에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 관악, 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장)공사

건설폐기물처리용역(단가계약)

나. 용역개요

- 당초 : 건설폐기물 운반 2,784㎥, 건설폐기물 처리 2,336톤

- 변경 : 건설폐기물 운반 1,990㎥, 건설폐기물 처리 3,341톤

다. 용역기간 : 2014.07.23.~2014.12.31.(총 용역기간: 2014.07.23.~2015.07.30.)

라. 계 약 자 : 우광개발(주)  대표 임태권

마. 설계변경  금액내용                                          (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
총부기금액	85,693,000원	85,693,000원	-	총계약금액 변동없음
1차부기금액	68,554,400	28,888,000	감 39,666,400	2014년 계약분
2차부기금액	17,138,600	56,805,000	증 39,666,400

바. 설계변경 사유 : 성상별 물량 증,감 및 신규공종 발생

사. 예산과목 : 자본적자출, 가동설비자산, 구축물, 시설비(세척갱생관정비비)

소방재난능력의향상으로 안정적인 재산시스템구축, 송방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설신설, 시설비및부대비,시설비(신설, 보수)

따로붙임 : 1. 설계변경 방침 및 합의서 각 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이철		급수설비팀장	김기상		급수운영과장	12/19 代김기상
협조자
시행	급수운영과-27654	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동 470-11)	/
전화	02-3146-4556	/전송	02-3146-4589	/		/	대시민공개