투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(최종-정산) 시행(2014도로시설물 보수공사 건설폐기물 처리용역)

우리사업소에서 시행중인 『2014 도로시설물 보수공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산-최종) 시행하오니 변경계약 절차를 진행하여 고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014 도로시설물 보수공사 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : 2014.4.25 ~ 2015.2.28

다. 도 급 자 : ㈜상익공영 대표 노승희, 우광개발(주) 대표 임태권

라. 설계변경(정산) 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총용역비	59,290,000	58,456,000	감)834,000

마. 설계변경 사유 : 정산 설계 변경시 수량 집계 착오 정정

- 일부 주간 수량을 야간으로 집계

바. 예산과목 :

- 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사(성동) : 도로시설관리, 자동차전용도로교량관리, 자동차전용도로 도로시설물 일상유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 한강일상유지보수공사(성동) : 교량관리, 한강교량관리, 한강교량 일상유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 2014 영동대교 보수공사 : 교량관리, 한강교량관리, 영동대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 아차산교 교면포장 개량공사 : 도로시설관리, 자동차전용도로 고가차도 및 입체교차로 관리, 자동차전용도로 시설물 교면포장개량공사, 시설비 및 부대비, 시설비

첨부  변경 설계내역서(최종 정산) 및 수량산출서 1부.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김근섭		교량보수과장	박춘배		성동도로사업소장	전결 12/19 정진오
협조자
시행	교량보수과-3944	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동 251-14)	/
전화	02)2210-1583	/전송	02)2210-1587	/	kgs727@seoul.go.kr	/	대시민공개