문서번호	방재시설부-13519
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
임병길		代장수철	12/19 임춘근
협조

설계변경(총괄 5회, 2차 5회)검토보고

(송정사근 빗물펌프장 증설공사)

2014. 12

도시기반시설본부

방재시설부

설계변경(총괄5회, 2차 5회)검토보고

(송정,사근 빗물펌프장 증설공사)

『송정,사근 빗물펌프장 증설공사』에 대한 실정보고 승인사항에 대한    공사 설계변경 검토보고 임.

Ⅰ		관련근거

○ 공사감독2처-21673호 (2014.12.16) “설계변경시행 및 설계도서 제출”

○ 소규모 공사감독 위수탁 협약서(2008. 2. 22)

- 설계변경의 시행 및 변경도서 작성은 시설관리공단이 시행

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 송정동 81-5, 성동구 사근동 198-5

○ 규    모

- 송 정 : 펌프증설 Q=616톤(2대), 토출관로 확장(2련, D=2,100mm, L=70m)

- 사 근 : 펌프증설 Q=1,020톤(2대), 토출관로 신설(1련, D=2,800mm, L=36m)

○ 사업기간 : 2012.12.27 ～ 2015. 1. 30

○ 총사업비 : 17,398백만원 [도급비 : 7,476백만원]

○ 감리사   : 서울시설관리공단  ○ 시공사 : 경동산업(주) 외1

Ⅲ		공단 보고내용

○ 설계변경 주요내용

- 청계천 둔치 시설물(자전거도로, 체육시설, 산책로 둥) 원상복구 추가 반영

․ 청계천 자전거도로 원상복구 : 칼라아스콘 (폭 4m, 연장 43m)

․ 체육시설 구간 원상복구 : 무근콘크리트+도막형 바닥재(A=164㎡)

․ 청계천 산책로 원상복구 : 칼라투수콘(폭 1.5〜2.0m, 연장 65m)

- 도시가스관 입인관로 부설 누락사항 반영

･ 관로부설 : 관경 D50〜D110mm, 연장 128m

- 송정펌프장 기존 및 증설펌프장 사이에 이동동선이 단절되어 관리부서(성동구)에서 이동통로(개구부, 1개소) 추가설치 요구사항 반영

- 기타 실물량 정산에 따른 수량조정 등

○ 주요 설계변경 내용

(단위: 천원)

연번	위치	공 종	세 부 내 용	증․감액	비고
1	사근	- 청계천 둔치 하천시설물 (자전거도로, 체육시설) 원상복구	․자전거도로 원상복구 (칼라아스콘 : 1.7a) ․체육시설부지 복구 : 면적 A=164㎡	증) 14,465
2	″	- 청계천 둔치 산책로(칼라 투수콘) 원상복구	․칼라투스콘 L=68m ․도막형 바닥재 A=46㎡ ․가림막 휀스 84경간	증) 17,111
3	송정	- 도시가스 인입관로 부설	․도시가스 인입관로(폴리 에틸렌관,D=50〜110mm L=128m) 설치 등	증) 14,795
4	″	- 펌프장 이동통로(개구부) 추가설치(운영부서 요청)	․기존 구조물 벽체 천공 및 철재(H-빔) 보강 등	증) 10,100
5	송정 사근	- 기타 시공물량 정산	․배수시설(U형 측구) 추가설치, L=30m ․송정 가동보 설치시 차수판 반영 등 ․기타 1식	증) 9,970
		직접공사비		증) 66,441
		제 경 비		증) 31,652
		계		증) 98,093

○ 주요공종 수량 증․감 현황

구 간	공 종		총 차 분			2 차 분			비 고
			당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
사근	청계천 둔치 시설물 원상복구 (자전거 도로, 체육시설)	칼라투수콘 포장 (t=7cm)	42.7㎡	-	감 42.7㎡	42.7㎡	-	증 42.7㎡
		칼라아스콘 포장 (t=11cm)	-	1.7a	증 1.7a	-	1.7a	증 1.7a
		도막형 바닥재 포설	-	164㎡	증 164㎡	-	164㎡	증 164㎡
	청계천 둔치 산책로 원상복구	칼라투수콘 포장 (t=7cm)	-	68m	증 68m	-	68m	증 68m
		도막형 바닥재 포설	-	46.5㎡	증 46.5㎡	-	46.5㎡	증 46.5㎡
송정	도시가스관 인입공사	폴리에틸렌관 (D=110mm)	-	48m	증 48	-	48m	증 48m
		가스배관용 탄소강관 (D=50mm)	-	80m	증 80m	-	80m	증 80m
	펌프장 이동통로 (개구부) 추가설치	기존 벽체천공 (B=1m, H=2m)	-	1개소	증 1개소	-	1개소	증 1개소
		잡철물제작(간단)	-	0.283톤	증 0.283톤	-	0.283톤	증 0.283톤
		철골가공조립	-	0.507톤	증 0.507톤	-	0.507톤	증 0.507톤

○ 계약금액 조정현황(총괄)                           (단위 : 백만원)

구 분		전 체 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		7,476	7,574	증) 98
도급액	공급가액	6,797	6,886	증) 89
	부 가 세	679	688	증) 9
	계	7,476	7,574	증) 98

○ 계약금액 조정현황(2차분)                          (단위 : 백만원)

구 분		2 차 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		4,887	4,985	98
도급액	공급가액	4,443	4,532	89
	부 가 세	444	453	9
	계	4,887	4,985	증) 98

○ 시설관리공단 위탁감리원 검토의견

- 전체 및 2차공사 계약금액 조정현황은 실정보고 승인사항에 따른 설계･시공 반영사항으로 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 공단 설계변경 보고내용을 검토한 바, 적정한 것으로 판단되므로 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임   1. 공단 설계변경 시행공문.

2. 설계변경 내역서(총괄 5회, 2차 5회).끝 .