문서번호	정수시설과-2984
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		안길찬	12/19 박기석
협조

2014 강북정수센터 취정수장 조경관리 용역

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2014.  12.

강북아리수정수센터

정수시설과

2014 강북정수센터 취정수장 조경관리 용역

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『2014 강북정수센터 취정수장 조경관리 용역』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

1. 심의대상

가. 용 역 명 : 2014년 강북정수센터 취,정수장 조경관리 용역

나. 도 급 자 : 미래조경(주)  대표 김동수

다. 용역기간 : 2014. 04. 07 ~ 12. 22

라. 도급금액 : 169,796,240

마. 용역개요

▸ 잔디깎기    22,074㎡       ▸ 풀 깍기  557,279㎡

▸ 풀 뽑기     48,105㎡       ▸ 잔재처리    186회

▸ 교목전정     1,030주      ▸ 관목전정   4,733㎡

2. 심의일시 : 2014. 12. 19(금)

가. 심의장소 : 강북아리수정수센터 정수시설과 사무실

3. 설계변경 현황

가. 용역비 변경개요

구 분	금 액		증, 감
	당 초	변 경
도 급 비	169,796,240	155,660,000	-14,136,240

나. 주요 공종 변경사항

- 풀깍기 및 풀뽑기 횟수조정으로 물량 감소발생

- 폐기물 운반물량과 넝쿨 및 낙엽제거 물량의  증가

- 소나무 전정 및 고사목 제거 신규발생

- 국민 및 연금보험료 미납부에 대한 감액

▸ 주요 물량 변경사항

공 종	단위	수 량		증, 감
		당 초	변 경	증	감
잔디깍기	㎡	22.074	7,358		14,716
풀깍기	㎡	557.279	389,986		167,293
풀뽑기	㎡	48.105	34,913		13,192
잔재처리	회	186	235	49
교목 전정	주	1,030	1,294	264
관목전정	주	4,733	3,626		1,107
소나무, 가로수 전정	주	16	343	327

4. 심의내용 및 결과

용 역 명	심 의 내 용	결 정 내 용
2014 강북정수센터 취정수장 조경관리 용역	◦ 설계변경 타당성 ◦ 신규공종 단가산출 타당성 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정성 ◦ 각종 제반규정 준수여부	◦ 설계변경 타당 ◦ 신규공종 없음 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정 ◦ 각종 제반규정 준수타당

※ 본청 원가관리시스템에 의하여 제비율 검증 실시(2014. 12. 18)

5. 조치의견

용역 설계변경 심의결정 내용과 같이 물량 및 계약금액에 대한 정산 설계변경하여 재계약을 의뢰하고자 합니다.

따로붙임 1. 설계변경 심의위원회 의견  1부.

2. 심의 결정된 변경 설계서   1부.

3. 제비율 검증              1부.    끝.