투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	관급자재 변경계약 요청(PC박스)

1. 관리과-9726(2014.8.13.)호와 관련입니다.

2.  “청계천 하류횡단 차집관거 개선공사” 관급자재와 관련 아래와 같이 변경계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경계약 내역

품 명 (규격)	수 량		금 액 (변경전)	납품기한	계 약 자
	변경전	변경후
조립식철근콘크리트암거블록 (2@2500×2000mm(B×H),2련,철근보강형)	126m	122m	253,638,000원 (261,954,000원)	2014.12.31	㈜지구코퍼레인션 김제두

나. 변경사유 : 작업물량 변경에 따른 수량조정

다. 예산과목: 도시안전실물재생시설과, 물재생시설개선및리, 물재생시설개선,차집관로 성능개선, 시설비및부대비, 시설비  끝.

	물재생과장
주무관	홍민표		주무관	김근수		물재생과장	12/19 강병수
협조자
시행	물재생과-7400	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2579	/	hihpyo@seoul.go.kr	/	대시민공개