내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	(재)마리아수녀회 대표 정영숙 귀하
(경유)
제목	국고보조사업계획 변경 승인

1. 서울특별시 꿈나무마을 마회 14-1887(2014.12.18.)호와 관련입니다.

2. 2014. 아동복지시설 기능보강사업 추진관련, 동절기 준공검토 사항에 대한 충분한 시간을 갖고 마무리하기 위해서 공사기간 연장 승인요청한 사항을  「2014 아동분야 사업안내」 기준에 의거 다음과 같이 승인하오니 기능보강 사업추진 및 마무리에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 국고보조 사업계획변경 승인내역

(단위 : 천원)

변 경 전			변 경 후
사업명	예산액	공사기간	사업명	예산액	공사기간
남아숙사(노란꿈터) 리모델링	2,400,000	‘14.7.1. ~12.16	남아숙사(노란꿈터) 리모델링	2,400,000	‘14.7.1. ~’15.2.28

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김경래		복지팀장	홍우석		아동청소년담당관	전결 12/19 김영기
협조자
시행	아동청소년담당관-28239	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 5층 아동청소년담당관	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5151	/전송	02-2133-0732	/	jyinman@seoul.go.kr	/	대시민공개