투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약(총차5회, 2차4회)의뢰

1. 우리본부에서 시행중인 「공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경계약(총차5회, 2차4회)의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30

다. 도 급 비 : 5,541백만원(2차 1,747백만원)

라. 도 급 자 : ㈜승영기술공사 대표 김성찬

마. 예산과목

- 치수및하천관리, 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량증대, 시설비

- 치수및하천관리, 수방대책사업, 면목4빗물펌프장 시설용량증대, 시설비

바. 설계변경사유 : 총차물량 증, 감 및 2014년 예산배정에 따른                                     설계변경에 따라 2차 계약내역 조정

사. 설계변경 내역

1) 총차 5회

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		11,691,500,000	11,691,500,000	-
도급비	공 급 가 액	5,037,377,727	5,892,783,182	증) 855,405,455
	부가가치세	503,737,773	589,278,318	증) 85,540,545
	소 계	5,541,115,500	6,482,061,500	증) 940,946,000
관 급 자 재 비		842,245,200	842,245,200
이 전 비		5,308,139,300	4,367,193,300	감) 940,946,000

2) 2차 4회

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		2,533,000,000	5,021,000,000	증)2,468,000,000
도급비	공 급 가 액	1,588,254,546	2,970,700,000	증) 1,382,445,454
	부가가치세	158,825,454	297,070,000	증) 138,244,546
	소 계	1,747,080,000	3,267,770,000	증) 1,520,690,000
관 급 자 재 비		652,899,000	427,092,710	감) 225,806,290
이 전 비		153,021,000	1,326,137,290	증) 1,173,116,290

※ 2014년도 배정된 예산안에서 2차변경 및 총차물량내에서 차수물량조정

따로붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차 5회, 2차4회) 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	代장수철		방재시설부장	12/19 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-13505	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개