문서번호	급수운영과-27623
결재일자	2014.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이철	김기상	전결 12/19 장시명
협 조

설계변경 사전심의 결과보고

(2014년 관악ㆍ금천구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역-1회)

2014. 12.

명에 의거 관내 『2014년 관악ㆍ금천구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)』 에 대하여 설계변경 심의위원회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  12. 19

보 고 자  직 :  지방시설주사보  이철

□ 공사 현황

○ 용 역 명 :  2014년 관악구 및 금천구 관내 상수도(송배수관, 시설물, 포장)공사

건설폐기물 처리 용역

○ 용역개요 : 폐기물운반 2,783㎡, 폐기물처리 2,336톤

○ 용역기간 : 2014.07.23. ~ 2015.07.30.

○ 용역금액 : 85,693,000원

○ 수 급 사 : *************

□ 설계변경 심의 위원회 개최

○ 일    시 : 2014. 12. 19(금). 10:30

○ 장    소 : 3층 급수운영과 사무실

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장(1명), 심의위원(시설관리과 3명)

급수운영과 김기상 외 1인

□ 심의 위원회 검토 내용

○ 신규공종 및 시공물량 증ㆍ감에 따른 집계표의 수량 상이 여부등 검토

□ 설계변경 사유 및 요약

○ 건설폐기물처리용역 과업지시서 6항 운반거리기준 중 폐기물처리장 운반 실측거리 반영

- 당초 : L=28km → 변경 : L=26.9km

공종	규격		단가(원/㎥)
	당초	변경	당초	변경	증.감
폐아스콘	24DT(L=28km)	24DT(L=26.9km)	16,398	15,951	감)447
폐콘크리트	24DT(L=28km)	24DT(L=26.9km)	16,085	15,654	감)431
폐토사	24DT(L=28km)	24DT(L=26.9km)	10,768	10,461	감)307
폐보호통	24DT(L=28km)	24DT(L=26.9km)	7,321	7,154	감)167

○ 설계수량과 현장여건 변화로 폐기물물량 및 성상 수량 변동

공 종	당초	변경	증·감
폐아스팔트 운반	1,755㎥	㎥	감1,755㎥
폐콘크리트 운반	989㎥	1,426 ㎥	증 437㎥
폐 토 사 운반	37㎥	37㎥	- ㎥
폐콘크리트 처리	2,274ton	3,280ton	증1006ton

○ 용역비 변경 내역

구 분	금 액		증․감	비 고
	당초	변경
1차부기금액	68,554,400	28,888,000	감 39,666,400
2차부기금액	17,138,600	56,805,000	증 39,666,400
총 부기금액	85,693,000	85,693,000	-

□ 처리의견

○ 우리사업소 설계변경 심의 위원회에서 변경설계도서에 대하여 위 사항을 검토결과 적정하게 설계변경된 것으로 심의된 바 원안 처리코자 합니다.

붙임 :  설계변경내역서 1부.

설계변경 사전 심의 의결 결과 1부.  끝.

.