함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(1차) 및 차수별 금액변경 계약의뢰[2014년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사]

1.  우리사업소에서 시행중인 『2014년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속)』건에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차) 및 차수별 금액변경 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속)

나. 계약업체 : 소니종건(주) 유연학, ㈜신일 김성신

다. 공사기간 : 2014.7.1 ~ 2014.12.31(총공사기간 2014.7.1~2015.6.30)

라. 변경내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증감액(원)	비고
총부기금액	1,846,577,900	1,846,577,900	-
금회(1차수)계약금액	1,108,000,000	988,030,000	감 119,970,000

마. 설계변경 사유 : 신규공종 및 계약물량 증감사항 발생

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

배급수비, 수선유지교체비,기타교체비, 불용관정비

붙임 : 1. 설계변경 관련서류 각 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이문성		시설관리과장	12/19 代임종진
협조자
시행	시설관리과-18957	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3392	/전송		/	lhs329900@seoul.go.kr	/	부분공개(6)