투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행에 따른 변경계약 요청

1. 도로보수과-11147(2014.12.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 「2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사 운반 및 처리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회, 정산) 시행하고 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사 운반 및 처리용역

나. 계 약 일 : 2014.07.09

다. 용역기간 : 2014.07.11.~2014.12.31

라. 도 급 자 : ㈜신잔토환경 대표 박종혁

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	설계변경 금액		증․감	비 고
	당 초	변 경
총용역비	4,090,000	11,092,000	증)7,002,000
공급가액	3,718,182	10,083,637	증)6,365,455
부가가치세	371,818	1,008,363	증)636,545

바. 설계변경 사유 : ‘14년 하반기 예산 추가 재배정 관련 정비물량 증가로 인한 건설폐기물 증량   ※ 별첨 설계변경사유서

사. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경사유서 1부

2. 설계변경품의서 1부

3. 설계변경시행계획서 1부

4. 변경설계서 1부. 끝.

	도로보수과장
주무관	최진규		도로보수과장	12/19 이석재
협조자
시행	도로보수과-11158	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관 2층	/
전화	029445433	/전송	029455072	/		/	대시민공개