문서번호	정수시설과-3177
보존기간	년
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장
노성제		전결 12/19 박심근
협 조

설계변경 심의결과 보고

〔2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)〕

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의결과 보고

〔2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)〕

『2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)』 시행중 발생한 물량 증․감 사항에 대하여 설계변경심의를 실시하고, 그 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 4. 21. ～ 12. 31.

○ 계약금액 : 43,864,790원

○ 계약상대자 : ㈜장학전력 대표자 정진호

○ 공사규모

- 염소투입설비 현장제어반 등 20개소 34면 서지보호기(SPD) 설치

- 탈수기동 등 기존 건물의 일반조명 171등 LED조명으로 교체

- 관사 49세대 노후 분전반 정비

- 기타 노후 전기설비 보수(정비) 1식

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 사유

- 제3차 작업지시 물량 설계 반영(정산)

※ 제1차, 제2차 작업지시 사항은 기 설계 반영

- 건강보험료, 연금보험료 등 정산 (증빙서류 비제출에 따른 감액)

○ 설계변경 내용

- 계약금액

변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
43,864,790원	40,499,000원	(감) 3,365,790원

- 시공물량 (상세내역 별첨)

구 분	공 종	금 액
물량 감소	접지선 설치(매설) 외 100건	(감) 1,383,633원
물량 증가	비닐절연접지케이블(옥내) 외 3건	(증) 700,088원
보험료 감액	건강, 연금, 노인장기요양보험료	(감) 897,654원
제경비 정산	순공사원가 변경분 반영	(감) 1,784,591원
계		(감) 3,365,790원

□ 심의결과

○ 설계변경의 타당성 : 타당

○ 증․감물량 적정 여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 조치의견

○ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증표 1부.  끝.