투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(여의교 보수공사)

1. 우리 사업소에서 시행중인 「여의교 보수공사」 에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 여의교 보수공사

나. 공사기간 : 2014.6.10. ~ 2014.12.26.

다. 도 급 자 : 동양강재건설㈜  대표 윤평한 외 1개사

라. 설계변경내역                                             (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		966,697,900	873,480,000		감) 93,217,900
도급액	공 급 가 액	826,089,000	794,072,728		감) 32,016,272
	부가가치세	82,608,900	79,407,272		감) 3,201,628
	계	908,697,900	873,480,000		감) 35,217,900
이 전 비		58,000,000	58,000,000		감) 58,000,000

붙 임 :  1) 설계변경 품의서 1부.

2) 설계변경 관련서류 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	정성오		주무관	금종융		시설보수과장	전결 12/19 代금종융
협조자
시행	시설보수과-5316	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울시 영등포구 도림로 145(대림동)	/
전화	3284-5467	/전송	836-3093	/	somc0855@seoul.go.kr	/	대시민공개