함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경 시행 (2014년 북부관내 포장도로 굴착복구공사)-변경1차

우리사업소에서 시행 중인 “2014년 북부관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)”에 대하여 정산결과 공종별 계약물량 증·감 사유가 발생됨에 따라 아래와 같이 설계변경(제1차) 및 차수별 금액변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 북부관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : 대한건설  대표 김영란외 1개사

다. 계약기간 : (변경없음)

- 총차 : 2014.05.21 ∼ 2015.06.30

-  1차 :  2014.05.21 ∼ 2014.12.31

라. 계약금액 변경사항

<총 부기금액 > : 변경 없음

- 당초 : 금1,214.325,770원

- 변경 : 금1,214,325,770원 (증,감 없음)

<1차분 금액 > : 감 231,415,000원

- 당초 : 금850,000,000원

- 변경 : 금618,585,000원 (감 231,415,000원)

마. 설계변경 사유 : 정산결과 공종별 시공물량 증·감에 따른 내역서 변경

바. 예산과목

- 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 기타교체비, 불용관정비

- 상수도사업비, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선교체비, 기타교체비,상수도관누수복구

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물,시설비, 시설비및부대비

- 소방용수시설설치 및 관리. 소방용수시설설치

- 배급수비,수선유지교체비(자원사업성시설비), 직결급전환 및 물탱크철거

따로붙임 :   1. 설계변경 사유서,  설계변경 심의결과 보고서,  설계변경 심의결정서  각1부.

2. 설계변경내역서(총차-제1회), (1차- 제1회) 각 1부.

3. 설계변경합의서 1부. 끝.

주무관	강대유		지방시설사무관대우	정재풍		급수운영과장	김수영		북부수도사업소장	12/19 이종백
협조자	주무관	한경란		계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-23601	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개