문서번호	시설과-9040
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		중부공원녹지사업소장
김영수	김영백	代김영백		12/22 이용태
협 조

『2014년 남산 및 산하공원 시설물 보수공사(단가계약)』

설 계 변 경 (최 종)  보 고

2014. 12.

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『2014년 남산 및 산하공원 시설물 보수공사(단가계약)』

설계변경(최종) 보고

『2014년 남산 및 산하공원 시설물보수공사(단가계약)』시행과

관련하여 시공물량의 증감 및 신규공종 발생에 따라 설계변경을 시행하고자 보고드림

1		공사개요

공 사 명 : 2014년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)

공사개요

○ 석축정비 140㎡, 도장 및 방수 4,000㎡, 도로보수 170㎡

○ 우레탄방수 200m, 기타 시설물정비 1식

공사기간 : 2014.03.25 ~ 2014.12.30

계약금액 : 400,000,000원

도 급 자 : 대표건설(주)  대표 박 종 현

2		설계변경 내용

설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
도 급 비	400,000,000	368,430,000	감) 31,570,000
예산과목	남산및산하공원시설물보수정비, 시설비 : 168,430,000 남산및산하공원등유지관리, 시설비 : 200,000,000

변 경 사 유

○ 계약금액내의 신규공종 발생 및 물량 증,감에 따른 변경

- 현장여건 및 시공물량 변동에 따른 증,감 발생

- 신규비목 발생등에 따른 변경

○ 남산공원 비탈면 낙석방지망 설치등 8개소(토목5차,시설과-5956)

- 남산 남측순환로 경계석 설치(83화장실→국립극장) 275m

- 남산 비탈면 낙석방지망 설치 377㎡

- 중랑캠핑숲 공중화장실 도색 175㎡

- 낙산공원 체육시설 바닥 포장 166㎡

- 낙산공원 배수로정비 28m

- 남산별관 1호터널 상부 방호벽설치 14개소

- 기타 시설물 정비 1식

○ 낙산공원 관리동건물 옥상방수등 9개소(토목6차,시설과-7298)

- 낙산공원 관리동건물등 옥상방수 332㎡

- 낙산공원 비탈면 배수로설치(민원) 20m

- 남산공원 남측순환로 보행길 탄성 및 규사포장 382㎡

- 남산공원(한남자락) 체육시설 바닥정비 130㎡

- 기타 시설물 정비 1식

○ 남산공원 필동화장실 급수관 정비등 4개소(토목7차,시설과-8280)

- 남산 필동화장실 급수관 보온 7m

- 남산 팔각편의점 주변 난간설치11m

- 남산공원 한남자락 체육시설 바닥 데크설치(11m×7m) 1개소

- 남산공원 필동운동장 그물망 설치 270㎡

○ 낙산공원 미조성 공원용지내 건물철거 3동(건축4차,시설과-4487)

- 동숭동 129-180등 3개동 철거 144㎡

○ 낙산공원 시소유 무허가건물 철거등 2개소(건축5차,시설과-4921)

- 이화동 9-59번지 철거 39㎡

- 남산공원 용암게이트볼장 지붕보수 14㎡

3		처리의견

○『설계변경 내용』으로 현장여건에 따른 신규공종 발생 및 물량 증,감 으로 인한 설계변경(최종) 시행 및 정산시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 변경설계서 1부. 끝.