문서번호	정수시설과-4076
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	12/22 代손수곤
협 조

2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

설계변경 검토 보고

2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행으로 발생한 시공물량 증․감 사항에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사규모 : 다목적구장 전기공사, 지하실침수경보시스템 구축, 154KV 지중선로 지지금구류 보수, 취수장 조명시설 설치, 고도처리장 액화산소 저장탱크실 전원설치공사 등

○ 계약금액 : 130,170,511원

○ 공사기간 : 2014. 6. 5 ~ 2014. 12. 20

○ 계 약 자 : ㈜한성콘트롤  대표 김 선 태

□ 설계변경 내용 및 사유

○ 시공물량 증감 내역

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
1) 기본공사
접지선 설치 (매설시)	10㎟	m	5	0	-5
접지봉 설치	Φ16×1800L 1본	개소	5	0	-5
접지봉 설치	Φ16×1800L 2본	개소	5	0	-5
접지봉 설치	Φ16×1800L 3본	개소	5	0	-5
접지봉 설치	접지봉 14Φ×1000 mm	개소	5	0	-5
접지단자함	5회로	면	5	0	-5
내열비닐절연전선(HIV)_옥내	450/75OV HFIX 2.5㎟	m	5.0	479.5	+474.5
내열비닐절연전선(HIV)_옥내	450/75OV HFIX 4㎟	m	5	0	-5
내열비닐절연전선(HIV)_옥외	450/75OV HFIX 2.5㎟	m	5	0	-5
내열비닐절연전선(HIV)_옥외	450/75OV HFIX 4㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 2.5㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 2.5㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 4㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 4㎟	m	5	0	-5

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 6㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 6㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 10㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 10㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 16㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 16㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 25㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 25㎟	m	5	93.4	+88.4
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 35㎟	m	5	0	-5
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 35㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 1C 6㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 1C 6㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 2.5㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 2.5㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 4㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 4㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 6㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 6㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 10㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 10㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 16㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 16㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 35㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 35㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 10㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 10㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 25㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 25㎟	m	5	93.4	+88.4
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 35㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 35㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 4㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 4㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 6㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 6㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 10㎟	m	5	38	+33
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 10㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 16㎟	m	5	95	+90
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 16㎟	m	5	0	-5
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 35㎟	m	500	0	-500
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 35㎟	m	5	0	-5

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
러그단자	동관단자 1 HOLE 6 ㎟	개	5	0	-5
러그단자	동관단자 1 HOLE 10 ㎟	개	5	0	-5
러그단자	동관단자 1 HOLE 16 ㎟	개	5	0	-5
러그단자	동관단자 1 HOLE 25 ㎟	개	5	0	-5
러그단자	동관단자 1 HOLE 35 ㎟	개	5	0	-5
케이블표지시트	0.23x300(저압)	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 2C 1.5㎟	m	5	702	+697
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 4C 1.5㎟	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 4C 2.5㎟	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 10C 1.5㎟	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 12C 1.5㎟	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 2C 1.5㎟	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 4C 1.5㎟	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 6C 1.5㎟	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 10C 1.5㎟	m	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 15C 1.5㎟	m	5	0	-5
컴퓨터용 케이블	AWG #20 0.5, 4C	m	5	0	-5
콘센트	매입-접지형,15A 250V 1구	개	5	0	-5
콘센트	매입-접지형,15A 250V 2구	개	5	4	-1
콘센트	매입-접지형,15A 250V 3구	개	5	0	-5
콘센트	누전차단기형,15A 250V 2구접지	개	5	0	-5
콘센트	방우형, 15A/250V, 1구	개	5	0	-5
콘센트	방우형, 15A/250V, 2구	개	5	0	-5
아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	5	19	+14
아우트렛박스	8각 54㎜	개	5	0	-5
시스템 박스	ACCESS FLOOR용 AL. 전열2구	개	5	0	-5
조명기구	LED 7W - 벽부망등	개	5	0	-5
조명기구	LED 7W - 직부등	개	5	0	-5
조명기구	FL 26W/2 - 다운라이트	개	5	0	-5
조명기구	LED 30W - 다운라이트	개	5	0	-5
조명기구	FL 32W/2 - 방진방습등	개	5	0	-5
조명기구	LED 22W/2 - 방진방습등	개	5	0	-5
조명기구	LED 22W/2 - 슬림파라보릭	개	5	0	-5
조명기구	LED 22W/2 - 슬림파라보릭(축전지내장)	개	5	0	-5
조명기구	LED 22W/2 - 매입슬림	개	5	0	-5
조명기구	LED 22W/2 - 매입슬림(축전지내장)	개	5	0	-5
조명기구	LED 22W/2 - 삼각등	개	5	0	-5
조명기구	32W/2 - 파이프펜던트갓등	개	5	0	-5
조명기구	LED 22W/2 - 파이프펜던트갓등	개	5	0	-5
형광등기구 보강대	행가 스프링형	개	5	0	-5
단로 램프스위치	단로 2구스위치	개	5	3	-2
스위치박스	1개용 54 mm	개	5	8	+3
스위치박스	2개용 54 mm	개	5	0	-5
조명기구	MH 150W/1 - 옥외보안등	개	5	15	+10

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
조명기구	LED 54W/1 - 태양광보안등	개	5	0	-5
조명기구	POWER LED 54W - 수목,건물 투사등	개	5	0	-5
강제전선관_옥내	아연도 16 mm	m	5	79.5	+74.5
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 16 mm	m	5	0	-5
강제전선관_옥내	아연도 22 mm	m	5	0	-5
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 22 mm	m	5	0	-5
강제전선관_옥내	아연도 28 mm	m	5	0	-5
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 28 mm	m	5	0	-5
강제전선관_옥내	아연도 36 mm	m	5	0	-5
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 36 mm	m	5	0	-5
강제전선관_옥내	아연도 42 mm	m	5	0	-5
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 42 mm	m	5	0	-5
강제전선관_옥내	아연도 54 mm	m	5	0	-5
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 54 mm	m	5	24	+19
강제전선관부속품	위샤캡 28C	m	5	0	-5
1종금속제가요전선관_옥내	16 mm 비방수	m	5	9	+4
1종금속제가요전선관_옥내	22 mm 비방수	m	5	0	-5
1종금속제가요전선관_옥내	28 mm 비방수	m	5	0	-5
1종금속제가요전선관_옥내	36 mm 비방수	m	5	0	-5
2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 17 mm 방수	m	5	0	-5
2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 24 mm 방수	m	5	0	-5
2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 38 mm 방수	m	5	0	-5
2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 50 mm 방수	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 16㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 16㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 22㎜	m	5	43	+38
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 22㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 28㎜	m	5	46.2	+41.2
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 28㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 36㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 36㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 42㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 42㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 54㎜	m	5	0	-5
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 54㎜	m	5	0	-5
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 16 mm	m	5	10	+5
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 22 mm	m	300	0	-300
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 22 mm	m	5	0	-5
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 28 mm	m	5	0	-5
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 28 mm	m	5	0	-5
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 36 mm	m	5	0	-5
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 36 mm	m	5	0	-5
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 42 mm	m	5	0	-5
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 42 mm	m	5	0	-5

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 54 mm	m	5	0	-5
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 54 mm	m	5	0	-5
경질비닐PVC전선관-매입	HI 28 mm	m	5	0	-5
경질비닐PVC전선관-매입	HI 36 mm	m	5	0	-5
경질비닐PVC전선관-매입	HI 42 mm	m	5	0	-5
파상형 경질폴리에틸렌 전선관	100㎜-1열	m	5	0	-5
관구밀폐기	실링가스켓, D100	개	5	0	-5
풀박스	100x100x50	개	5	0	-5
풀박스	100x100x75	개	5	0	-5
풀박스	150x150x100	개	5	0	-5
풀박스	200x200x100	개	5	0	-5
레이스웨이	BODY, 70 x 40	개	5	7	+2
케이블트레이	300W/150H, 사다리형	m	100	0	-100
케이블트레이 커버	300W 커버	m	10	0	-10
케이블트레이 HOR-ELBOW	300W HOR-ELBOW, 150H	m	10	0	-10
케이블트레이 VER-ELBOW	300W VER-ELBOW, 150H	m	10	0	-10
케이블트레이	400W/150H, 사다리형	m	10	0	-10
케이블트레이 커버	400W 커버	m	10	0	-10
케이블트레이 HOR-ELBOW	400W HOR-ELBOW, 150H	m	10	0	-10
케이블트레이 VER-ELBOW	400W VER-ELBOW, 150H	m	10	0	-10
케이블트레이 HOR-CROSS	400W HOR-CROSS, 150H	m	10	0	-10
케이블트레이 HOR-TEE	400W HOR-TEE, 150H	m	10	0	-10
조인트 박스	JOINT BOX(100X100X50)	m	10	0	-10
전선관지지행거(단독)	16 C	개소	10	0	-10
전선관지지행거(단독)	22 C	개소	10	0	-10
전선관지지행거(단독)	28 C	개소	10	0	-10
전선관지지행거(단독)	36 C	개소	10	0	-10
전선관지지행거(단독)	42 C	개소	10	0	-10
전선관지지행거(단독)	54 C	개소	10	0	-10
전선관지지대 (벽체)	W:100	개소	10	0	-10
전선관지지대 (벽체)	W:200	개소	10	0	-10
전선관지지행거(천정)	W:200	개소	10	0	-10
전선관지지행거(천정)	W:300	개소	10	0	-10
전선관지지행거(천정)	W:400	개소	10	0	-10
전선관지지행거(천정)	W:500	개소	10	0	-10
2) 추가 공사
소프트 스타터 교체	380V 160KW, 바이패스타입 내장형	대	2	0	-2
소프트 스타터 교체	380V 75KW, 바이패스타입 내장형	대	2
인버터 교체	400V 1.5KW	대	5	2	-3
케이블 철거(1송수 4호기)	6/10kV CV 60[mm2] 3C	m	35	0	-35
고압 가교PE 난연케이블 설치	6/10kV F-CV 70[mm2] 1C	m	105	0	-105
케이블 단말접속자재 설치	자기수축,6.9kV 1Cx70 ㎟	개	6	0	-6
강제 전선관(노출) 설치	아연도 104mm	m	8	0	-8

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
노말밴드 설치	아연도 104mm	개	1	0	-1
플렉시블 전선관 설치	104mm	m	2	0	-2
온도계 인디게이터 교체	베어링 빛 권선온도 측정용	대	10	0	-10
폐동	-	kg	44.94	0	-44.94
고철	-	kg	500	60	-440
ATS 교체	600v 4P 400A	대	1	0	-1
삼상 크리트 설치	이동용, 알루미늄(AC7A) 스텐볼트너트포함	SET	341	359	+18
삼상 크리트 설치	고정용, 알루미늄(AC7A) 스텐볼트너트포함	EA	10	10	0
단상 크리트 교체	이동용 B형, 알루미늄(AC7A)	EA	10	10	0
"ㄱ"형 행가 교체	ASLV550	EA	11	11	0
3) 1차 작업지시
(다목적구장 전기공사)
조명기구(옥외정자등)	LED 32W	개	0	4	+4
합성수지제 가요전선관	22㎜	m	0	27	+27
분전반	STS 분전반(50AF,4P)	면	0	1	+1
폴리에틸렌 전선관_옥내(고소작업)	PE 22	M	0	99	+99
내열비닐절연전선(고소작업)	HIV 450/750V 2.5㎟단선(IEC)	M	0	324	+324
배선용 차단기	표준형, 4P 600V 75A	EA	0	1	+1
4) 2차 작업지시
EOCR 교체	05,30,60A DMP TZ 지락	EA	0	3	+3
EOCR 교체	05,30,60A SS	EA	0	1	+1
FAN 교체	300*300	EA	0	1	+1
MG S/W 이설	30AF 이하	EA	0	1	+1
EOCR 이설	05,30,60A	EA	0	1	+1
AC.A-METER 철거후 마무리		EA	0	5	+5
지지애자 교체	6.6KV 드럼형 동봉용	EA	0	1	+1
소프트스타터 교체	30KW, 380V, 바이패스 외장형	EA	0	2	+2
5) 3차 작업지시
1. VTS반 개조		면	0	2	+2
2. 고재처리		면	0	1	+1
6) 4차 작업지시
1. 지하실 침수경보시스템 선로구축
합성수지제 가요전선관	CD 16㎜	m	0	542	+542
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 2.5㎟	m	0	264	+264
2. 1여과지 12계열~34계열간 후염소 비상교차전원 시스템 구축
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 25㎟	m	0	380	+380
배선용 차단기	표준형, 4P 600V 75A	EA	0	2	+2
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 5C 1.5㎟	m	0	90	+90
절연전선	KIV 25㎟	m	0	16	+16
파일롯 램프	25mm AC 220V	개	0	6	+6
다이젯 퓨즈	4A	개	0	6	+6

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
3. 침수경보 제어반설치
침수경보 제어반(1회로용)	400*500*150	면	0	4	+4
침수경보 제어반(4회로용)	500*600*150	면	0	ㅡ3	+3
전극봉 설치(1세트당)	2m	세트	0	15	+15
7) 5차 작업지시
DRIVE PCB	3KVA용	EA	0	1	+1
IGBT	150A	EA	0	2	+2
MAIN PCB	3KVA용	EA	0	1	+1
완전밀폐형축전지	7AH(무보수)	EA	0	16	+16
8) 6차 작업지시
폐 알루미늄 고재처리	알루미늄합금	kg	0	848	+848
행거 철거 재설치(위치수정)	550mm 이하	EA	0	18	+18
맨홀용 사다리 교체	-	EA	0	1	+1
맨홀 점검	-	개소	0	6	+6
9) 7차 작업지시
변압기 절연유	KSC-2301	L	0	1,864	+1,864
배유후 내부세척유	KSC-2301	L	0	180	+180
여과기 훨터	0.5마이크로	개	0	8	+8
실리카겔	호흡기용	식	0	1	+1
장비 사용료	절연유 교체장비	L	0	2,044	+2,044
PCBs 검사비	공인기관 정밀검사	대	0	3	+3
VCB 철거 재설치	6.6kv	대	0	1	+1
10) 8차 작업지시
1. 전기선로 설치(배전반 ~ 분전반)
노말밴드	아연도 54mm	개	0	3	+3
2. 전기실내 배전반 보강
NFB	3P 250AF/100-250A	개	0	1	+1
TB	3P 150A	개	0	1	+1
케이블	KIV 35㎟	m	0	1.5	+1.5
3. 액화산소저장실내 자립형 옥외 분전반설치
외함(전체 SUS)	500*700(800)*3200	면	0	1	+1
명판	3T * 30 * 200	개	0	1	+1
NFB	3P 250AF/100-250A	개	0	1	+1
TB	3P 150A	개	0	1	+1
케이블	KIV 35㎟	m	0	1.2	+1.2
PUSH TURN HANDLE	대	개	0	1	+1
ET단자		개	0	1	+1
DOOR STOPPER		개	0	1	+1
세트앙카	스텐레스 10mm	세트	0	4	+4

○ 다목적구장 전기공사

- 본부장 방침에 따라 설치한 다목적구장의 전기공사 시행으로 물량증가

○ 지하실침수경보시스템 구축

- 지하실침수경보시스템 구축에 따른 전기 통신공사 물량 증가

○ 154KV 지중선로 지지금구류 보수

- 154KV 지중선로중 전력구 및 맨홀내 지지금구류 일제정비로 보수물량 증가

○ 취수장 조명시설 설치

- 계단 이용하는 직원 안전사고 예방을 위하여 1,2취수장 계단 조도 개선

○ 고도처리장 액화산소 저장탱크실 전원설치

- 고도처리장 액화산소 저장탱크실에 액화산소 하역(주입)시 운반차량에 부착된 압송펌프 가동용 전원시설 미비로 민원이 야기되어 이를 개선하기 위하여 전원설치

○ 기타 예상으로 반영하였던 물량은 전량 감소요인 발생

○ 안전관리비 및 보험료, 퇴직공제부금 사후정산

․ 산업안전보건관리비 : 1,610,735원 감액(차수별 작업지시 금액이 40,000천원 미만인 경우 지급대상 제외 적용)

․ 국민건강 보험료 : 759,485원 감액(납입확인서 미제출)

․ 국민연금 보험료 : 1,112,422원 감액(납입확인서 미제출)

․ 노인장기 요양보험료 : 49,746원 감액(납입확인서 미제출)

○ 설계변경 내역

공 종	도 급 액		증 ․ 감	주요 변경사유
	당초	변경
도 급 액	130,170,511	104,399,900	(감) 25,770,611
1) 기본 공사	42,343,486	12,319,285	(감) 30,024,201	계약물랼중 연간 시공물량 정산
2) 추가 공사	45,780,035	20,693,807	(감) 25,086,228	연간 시공물량 정산
3) 1차 작업지시	0	2,653,121	(증) 2,653,121	다목적구장 전기공사
4) 2차 작업지시	0	3,785,972	(증) 3,785,972	취수장 및 이산화탄소실 전기시설 보수
5) 3차 작업지시	0	1,224,812	(증) 1,224,812	여과지 VTS 철거 등 보수
6) 4차 작업지시	0	21,246,879	(증) 21,246,879	침수경보시스템 구축
7) 5차 작업지시	0	1,352,674	(증) 1,352,674	1오니장 배출수질측정기 UPS 보수
8) 6차 작업지시	0	2,503,960	(증) 2,503,960	154KV 전력구 및 맨홀내 지지금구류 정비
9) 7차 작업지시	0	6,083,628	(증) 6,083,628	1여과지변압기 OT교체 및 취수장 조명 설치
10) 8차 작업지시	0	1,105,045	(증) 1,105,045	고도처리장 액화산소탱크실 전원설치공사
안전관리비 및 건강, 연금, 노인장기요양 보험료	3,532,388	0	(감) 3,532,388	납입내역 사후정산
기타 제잡비	38,514,602	31,430,717	(감) 7,083,885

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 시공물량 증감사항에 대한 설계변경 심의 검토결과 적정의견으로 설계변경 시행코자 합니다.

붙 임 : 변경설계내역서 1부. 끝.