투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서남권야구장 건립공사 계약변경(공사기간 및 계약내역 조정) 요청

1. 서남권야구장 건립공사 계약변경(공사기간 및 6‧7차 계약내역 조정) 시행 보고(건축부-15150호, 2014.12.16)와 관련입니다.

2.「서남권야구장 건립공사」에 대하여 다음과 같이 공사계약변경(총차 및 7차 공기연장, 6차 및 7차 계약내역 조정)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서남권야구장 건립공사

나. 계 약 자 : 현대산업개발(주)컨소시움

다. 계약요청 내용

1) 총차 및 7차 공사기간 연장                              (단위 : 천원)

구 분	금 액	공 사 기 간			비 고
		변 경 전	변 경 후	증 감
총차	168,581,916	‘09.02.05~‘15.02.28	‘09.02.05~‘15.06.30	+122일	4개월 연장
7차	58,871,680	‘14.05.12~‘15.02.28	‘14.05.12~‘15.06.30	+122일	4개월 연장

2) 6차 및 7차 내역조정 : 6차 및 7차 계약금액 변경없이 내역조정

※ 예산과목 : 문화관광디자인본부 체육진흥과, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 서남권지역 돔야구장 건립, 서남권 돔야구장 건립, 시설비

따로붙임  1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서(총차 및 7차) 1부.

3. 공정표(총차, 6차, 7차) 각1부

4. 설계내역서(6차 및 7차) 각1부.   끝.

	건축부장
주무관	윤용훈		건축총괄과장	강성욱		건축부장	12/22 김우성
협조자	주무관	김대식
시행	건축부-15319	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2608	/전송	02)3708-2659	/	yyhun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)