함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경에 따른 계약의뢰(대형 제수밸브 점검정비 용역)

우리 본부에서 시행 하는『대형 제수밸브 점검정비 용역(강남지역)』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 사 업 명 : 대형 제수밸브 점검·정비 용역(강남지역)

나. 사업개요 : 대형 제수밸브 점검·정비 1,903개소

다. 사업기간 : 2014. 5. 21. ~ 12. 31.

라. 예산과목 : 자본적지출. 유형자산취득. 구축물. 시설비(노후밸브 정비)

마. 도 급 자 : 수자원기술(주) 외 1개사

바. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 사 업 비		809,000,000	805,530,000	감 3,470,000
도급액	공 급 가 액	735,454,545	732,300,000	감 3,154,545
	부가가치세	73,545,455	73,230,000	감 315,455
	계	809,000,000	805,530,000	감 3,470,000

사. 변경 사유

- 현장상황에 따른 시행 물량 정산으로 용역비 감소

붙임 : 1. 설계변경 시행 관련 문서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	12/22 이규상
협조자
시행	시설관리과-6671	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개