투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재(미끄럼방지) 납품기한 연기 요청

1. 도로보수과-11640호(2014.12.22.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행 중인 교통사고사망지점 시설개선공사의 관급자재(미끄럼방지) 구매와 관련, 최근 계속적인 기온강하 및 제설작업으로 인해 공사가 불가하여 아래와 같이 납품기한 변경(연기)을 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건  명 : 관급자재구매(미끄럼방지 포장재)

나. 규  격 : 미끄럼방지포장재(SAFE001)

다. 계약자 : (유)세이프로드

라. 납품기한 변경

- 당초 : 2014. 12. 21

- 변경 : 2015.  2. 28

마. 변경(연기)사유 : 동절기 기온 강하 및 제설제살포로 인한 사용시기 미도래

따로붙임 : 1. 분할납부통지서(변경전) 1부.

2. 관급자재 납품기한 연기보고 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	백승만		도로보수과장	12/22 김권일
협조자
시행	도로보수과-11641	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7952	/전송	02-2657-7960	/	bsmbsmbsm@seoul.go.kr	/	대시민공개