문서번호	기술심사담당관-4892
결재일자	2013.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
정경수	박준익	최진선		03/21 문승국
협 조	심사총괄팀장		김길남
	기술관리팀장		이학구
	토목심사팀장		박동욱
	건축심사팀장		박효석
	설비심사팀장		김태기
	조경심사팀장		박미애

도시기반 시설물 수준 향상을 위한

해빙기 대비 건설공사장 관리실태 점검결과 보고

2013. 3

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

도시기반 시설물 수준 향상을 위한

해빙기 대비 건설공사장 관리실태 점검결과 보고

우리 시 본부에서 시행중인 건설공사장에 대하여 해빙기 대비

공사현장의 안전, 품질, 환경관리 실태 등에 대한 외부전문가 합동

점검을 실시하고, 점검결과 및 향후 조치계획을 보고 드림

[행정2부시장 방침 제31호, 2013.2.1]

Ⅰ				점 검 개 요

점검대상 : 본부 시행 59개 건설공사장

도시기반시설본부(49), 상수도사업본부(8), 한강사업본부(2)

점검기간 : 2013. 2. 25(월) ~ 3. 15(금)

점검반 : 6팀 편성, 팀별 2명 [외부전문가 19명, 직원 20명]

내부점검반 : 기술심사담당관 소속 직원

외부전문가 : 각 분야별 전문가(건설기술심의위원 등)

기관별 점검 대상 및 점검반 구성

계	도시기반시설본부				상수도 사업본부	한 강 사업본부
	토목부	건축부 공공시설부	설비부	도 시 철도국
59	26	6	4	13	8	2
6개팀	심사총괄팀 14 기술관리팀 2 기술지원팀 2 토목심사팀 8	건 축 심사팀	설 비 심사팀	기 술 관리팀	기 술 지원팀

주요 점검내용

해빙기 대비 공사장 안전․품질․환경 관리 실태 및 현장관리 적정 여부

공사 품질관리 적정성 (규격, 품질, 균열, 방수 등)

안전관리 ․ 환경관리 적정성 등

차량 ․ 보행자 통행안전 등 시민불편 요인

Ⅱ				점 검 결 과

【총 평】

▷ 대부분 공사현장에서 해빙기 시공관리 및 안전, 품질, 안전, 환경 관리를 위한 공사장 정리정돈과 공사로 인한 시민불편 최소화에 노력하고 있었으나,

▷ 일부 현장에서는 해빙기 주요 위험 요인인 비탈면, 절토구간, 축대 등의 안전사고 예방을 위한 철저한 계측관리 등 안전시공이 필요하고,

개착구간의 오래된 흙막이 가시설 중 토류판 부식과 어스앵카 긴장 이완 등에 대비한 철저한 사전점검 및 보강 등이 요구되었으며,

▷ 성토 및 굴착구간 되메우기시 지반 침하가 발생하지 않도록 공사잔재를 제거하고 정밀 다짐을 시행하는 등 해빙기 시공관리에 철저한 대비가 필요하며,

▷ 또한, 공사현장의 고임물 처리 및 저지대 현장으로의 빗물 유입방지를 위한 배수시설 확보 등 우기대비 대책과 공사장 인근 주민의 불편이 없도록 공사잔재 정리 등 환경 정비도 요구되었음

점검결과 지적사항

총 지적건수 : 105건

- 보완시공 22건, 현장시정 64건, 기타(개선 검토 등) 19건

기관별 지적현황

(단위 : 건)

기 관 별		점검대상 공사장	계	보완시공	현장시정	기타
계		59	105	22	64	19
도시기반시설본부		49	89	17	54	18
	- 시 설 국	36	57	14	31	12
	- 도시철도국	13	32	3	23	6
상수도사업본부		8	12	2	9	1
한강사업본부		2	4	3	1	-

유형별 지적현황

(단위 : 건)

기 관 별	계	해빙기 대비	품질	안전	환경	공정
계	105	10	22	60	10	3
도시기반시설본부	89	7	17	53	10	2
상수도사업본부	12	3	2	6	-	1
한강사업본부	4	-	3	1	-	-

Ⅲ				조 치 계 획

지적사항은 점검당일 현장에서 시공사 및 감리단에 통보(전달)하여 즉시 시정토록 조치하였으며, 시정결과를 제출토록('13.3.29까지 수합) 공사 시행부서에 공문 통보

즉시 시정이 가능한 사항은 바로 조치하고, 결과를 전․후 사진 첨부하여 제출

즉시 시정이 어려운 사항은 구체적인 조치계획 제출

공사장 관리부서에서는 수시 현장점검을 실시하고, 지적사항 보완 및

현장근무자 교육토록 조치

붙임 : 1. 건설공사장 주요 지적사항 (현황사진) 1부.

2. 공사현장별 지적내용 및 조치계획(도시기반시설본부) 1부.

3. 공사현장별 지적내용 및 조치계획(상수도사업본부) 1부.

4. 공사현장별 지적내용 및 조치계획(한강사업본부) 1부.

5. 공사장별 점검자 현황 1부. 끝.