함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2014년 은평구관내 급수공사 건설폐기물처리용역)

1. 우리사업소에서 시행하는 「2014년 은평구관내 급수공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 은평구관내 급수공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 : 태성용아개발(주) 대표 윤영석, (주)아이캐이 대표 이상진

다. 계약기간 : 2014.07.25 ~ 2015.06.30

라. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)-불용관

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)-긴급누수

마. 설계변경 사유 : 폐기물량 증․감, 신규공종 및 차수별 금액 변경

바.  금액조정                                                                                                                                              (단위:원)

구분	차수	당초	변경	증․감	비 고
용역비	총공사부기금액	67,932,000	67,932,000	-
	금차	40,000,000	0	-40,000,000

붙 임 : 1. 설계변경 요약보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 개최결과보고서 1부.

4. 변경합의서 1부. 끝.

주무관	강병국		★시설관리팀장	천성훈		시설관리과장	박길영		서부수도사업소장	12/22 설동을
협조자	주무관	손인숙
시행	시설관리과-34112	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 홍제2동 38-69	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	rido011@seoul.go.kr	/	대시민공개