투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	강서구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 연기 승인 통보

1. 강서구청 안전치수과-23048(2014.12.19.)호 와 관련입니다.

2.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

구 분	시 공 사	원 인 자	당 초	변 경	비 고
신호기	(주)태건전설	강서구청(안전치수과)	2014.07.16. ~ 2014.11.30	2014.07.16. ~ 2015.05.31	승인

3. 연기사유 : 선행공정인 토목공사의 공기연장에 따른 공사기간 연장.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	양상규		기전과장	12/22 박재경
협조자
시행	기전과-16000	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개