시 행	설비부-14605
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	환경설비과장	설비부장
	배수웅	이달영	12/22 代권오식

설계변경 자문회의(소위원회) 심의결과(제28차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-14004호				요청부서		건축설비과		심의일자		2014.12.22
공 사 명			신림2 빗물펌프장 설치공사
공 사 개 요			공사규모				집수정 구조물 V=5,300㎥, 건축 700㎡
			공사기간				2013.01.04. ~ 2015.02.28.
			감 리 사				도화엔지니어링(주)외 1개사
			설 계 사				㈜삼안 외 1개사
			시 공 사				임원개발(주) 외 1개사
심의요청사유							∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 주요사유> 서울시 남부도로사업소 승인조건으로 교통신호기 공사는 지중화(매설)시공을 준수하도록 되어 있어 당초 가공설계에서 지중으로 변경. 교통신호제어기는 당초 유용에서 경찰청 교통신호제어기 표준규격(2010.08)의 기능검사 필증(개발자검사용)을 소지한 업체의 제품으로 교체변경.
원설계자 의견
심의결과		조건부			붙임 심의위원 지적사항 보완 조건
심의결과 조치					· 심의위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			김창균				간 사		배수웅
	위 원			곽용길				위 원		박시현
	위 원			이기철				위 원		김홍석