문서번호	토목부-25365
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	12/22 노우성
협조

시설공사 준공기한 연기 검토

(신상도지하차도 확장공사)

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

시설공사 준공기한 연기 검토

(신상도지하차도 확장공사)

『신상도지하차도 확장공사(4차)』준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 한종(신상도)제14-14호(2014.12.16.) 준공기한 연기 검토 보고

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 동작구 상도동 159-21 ∼ 207-05

○ 규    모

- 도로확장 : B=2차로 → 4∼6차로, L=324m

- 지하차도확장 : B=2차로→4차로, L=230m

○ 공사기간 : 총괄 2007.12.31. ∼ 2015.12.31.

4 차 2010.12.30. ∼ 2014.12.31.

○ 도급비 : 총괄 11,722,115천원, 4차 98,889천원

○ 도급사 : (유)한백종합건설 외 1개사

Ⅲ		보고내용

○ 연기사유

- 본 공사 철거공사 진행중 세입자 미이주로 인한 명도소송(상도동 159-24호) 및 철거시기 조정(상도동 159-20호)을 요구하는 민원등으로 당초 준공기한내 철거가 불가능

※ 명도소송 추진현황(상도동 159-24)

· 2014.11.12. : 본안소송 소장접수(1심 진행중)

· 2014.12. 8. : 부동산 점유이전 금지가처분 집행

- 2013년 사고이월 예산으로 출납폐쇄일(‘15. 2.28.)까지 준공기한을 연기하여 예산의 효율적 집행(불용 방지)

○ 공사기간 연기현황

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
총 괄	‘07.12.31.∼‘15.12.31.	변경없음	-
4 차	‘10.12.30.∼‘14.12.31.	‘10.12.30.∼‘15.2.28.	증59일

○ 감리단 검토의견

- 본 공사 철거대상 건물 명도소송등으로 4차분에 대하여 준공기한을 연기함이 타당함

Ⅳ		조치계획

○ 감리단 검토의견과 같이 4차분 준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

○ 연기에 따른 귀책소재 : 발주청

○ 지체상금부과 여부 : 미부과

붙  임 : 1) 감리검토의견서 1부

2) 시공사 공문사본 1부.  끝.