투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	GS건설 주식회사
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사(준공)기한 연장 승인

1. GS건-종각-2014-61호(2014.10.29)와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 교통안전시설 원인자부담공사 공사(준공)기한 연장 승인요청에 대해 아래와 같이 연장 승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명  :  교통안전시설 원인자부담공사(교통신호기)

나. 공사장소 : 종로구 청진구역 도시환경정비사업 종각역 개선공사

다. 원 인 자 : GS건설 주식회사

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 당 초 : 2013.03.25 ~  2014.10.30

- 변 경 : 2013.03.25 ~ 2015.07.30

마. 공사내용

구 분	공사관련업체			공사내역	비 고
	설 계	감 리	시 공
신 호	㈜건영이앤씨	㈜영호이앤씨	미래월드안전(주)	- 제어기 1대(재설치) - 지주 10본 (신설 4, 이설 1, 철거 5) - 신호등 16조 (신설 8, 이설 4, 철거 4)) - 보행,잔여,보조등 12조 (이설 8, 철거 4)

바. 공사(준공)기한 연장사유 : 토목공사 지연으로 인한 교통안전시설물 원인자부담공사 연기요청.

※ 조건부 승인

- 교통안전시설 설치공사 원인자준수사항(신호) 내용에 따라 공사시행 및 2014년 교통신호기공사 업무처리 가이드라인 준수.

- 향후 변경시공을 필요로 하는 경우에는 우리사업소에 시공 승인신청(시경찰청의 규제심의 승인서 첨부)하여 승인을 득한 후 공사시행.

- 준공전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완결후 준공요청.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	박정민		기전과장	12/22 정윤식
협조자	주무관	박신범
시행	기전과-11768	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 768 (번2동 365-1)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5476	/전송	02-945-5074	/	jmp7019@seoul.go.kr	/	대시민공개