투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	주식회사 고황 대표 김 미 숙
(경유)
제목	공사중지 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 2014.11.20일 계약체결하여 공사시행 중인 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사와 관련 아래와 같은 사유로 공사 중지를 통보하오니 지장물 정리 등 현장 내 안전조치를 완료한 후 철수하시기 바라며,

3. 중지되는 기간에 대하여는 공사기간 연장시행 예정임을 알려드립니다.(공사재개 시 별도 통보 예정)

○ 공사중지 사유

- 동절기 도로굴착 통제에 따른 굴착수반공사 시행 불가

- 기온저하에 따른 양질의 품질확보 어려움(콘크리트 타설 등)

- 공사구간 지장물 이설 지연(한전케이블)

- 도로공사장 점용 규제심의에 따른 교통처리용역시행 등 .끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김영원		시설보수과장	전결 12/22 정재현
협조자
시행	시설보수과-9128	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동(보건소길 2 ) 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5451	/전송	02-945-5073	/	ywk2601@seoul.go.kr	/	대시민공개