투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(1회)

우리사업소에서 시행중에 있는 『2014~15년 제설작업용역(장기계속)』에 대하여 다음과 같이 설계변경코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014~15년 제설작업용역(장기계속)

나. 도 급 자 : 성심중기  대표 오정현

다. 변경내용

1) 준공기한 : 전체분 : 2014. 11. 10.~ 2015. 4. 15.

1차분 : 2014. 11. 10.~ 2015. 2. 28.

2) 도 급 비 : 전체분 174,900,400원 → 변경 250,000,000원(증75,099,600원)

1차분 174,900,400원 → 변경 215,900,000원(증40,999,600원)

라. 변경사유 : 잦은 강설로 인한 제설 작업일 수 증가

첨  부 : 1. 설계변경 검토보고(설계변경사유서) 1부.

2. 설계변경내역서(1차변경) 2부. 끝.

주무관	하승환		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	12/22 정진오
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-5787	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개