투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(자문회의 결과 통보)

1.업무지시현장 :  용허리공원 빗물저류조 설치공사 (주)신명건설기술공사

2.작 성 일 자 : 2014-12-22 00:12:00

3.지 시 내 용: 용허리공원빗물저류조 돌관공사 관련 자문회의 결과를 아래와 같이 알려드리오니 설계변경 등 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 자문회의 일시 : 2014. 12. 16(화)

나. 자문결과 : 법정 쟁송 이전에 합리적인 수준에서 돌관공사비 지급

다. 조치사항 : 공사비 산정에 있어 과다 또는 허위 청구된 금액이 발생되지 않도록 객관적인 자료를 근거로 돌관공사비를 산정 후 설계변경시 반영  끝.

주무관							한종수			치수시설과장					12/22 김흥근
협조자
시행			방재시설부-13601									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 8 프리미어 플레이스 빌딩 14층 (무교동 96번지))															/
전화		02 - 3708 - 8772						/전송			02 - 3708 - 8756					/	ggabii@seoul.go.kr												/	대시민공개