문서번호	공간정보담당관-13291
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		김태준	12/22 조봉연
협조

2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 사업 주간업무(12월3주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-4594				131,400천원

2014. 12.

공간정보담당관

(공간정보개발팀)

2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 사업

주간업무(12월 3주) 보고

사업명			2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 사업
사업기간			`14.7.22. ~ `15.1.17.	서울시담당		공간정보담당관 최지혜
사업비			131,400천원	업체/PM		㈜씨엠월드 박철희
보고기간			‘14.12.15.~‘14.12.19.	전체공정율		계획 85.2% / 실시 59.9%
주요내용			1. 항공사진 효과조정 및 파일 포맷 재정의 구현 2. 항공사진 변환 및 파일명 표준화 작업 3. 국정원 보안 검수 의뢰
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2014.12.15 ~ 12.19)				차 주 계 획 (2014.12.15 ~ 12.26)
시스템개발	1. 시스템 구현 - 항공사진(원본) 보기 효과조정 기능 구현 - 흑백전환 및 특성설정 기능 구현 - 파일 포맷 재정의 2. 시도행정 정보 검색 - WSDL 통신여부 테스트 및 구현 - GPKI 암/복호화 테스트 및 구현				1. 시스템 구현 - 온라인 민원(전자매체)을 위한 파일 업로드 정의 및 기능 구현 - 온라인 민원(전자매체)을 위한 파일 다운로드 및 DRM 파일 포맷정의 구현 2. 시도행정 정보 검색 - 원본관리 시스템의 온라인 민원(전자매체) 정보 검색 및 승인 처리 구현
항공사진 DB구축	1. 2014년도 촬영 항공사진 파일 이관 - ECW, 이관(인트라넷)				1. 2014년도 촬영 항공사진 파일 이관 - Thumbnail, Tiff 이관(인트라넷, 원본관리)
기타사항					1. 교육계획 수립 - 사용자/운영자 교육계획 수립
산출물/ 별첨자료	○ 주간보고서 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타