보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	代권영안	12/22 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-31885

광진구상수도공사 감독업무 수행중 *************** 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 12. 22.

보고자 : ***********************

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	*************	***	2014.12.12.~12.22	신설-422

□ 연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간
1	*************	***	신축현장 타공정지연	2014.12.29

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 일정 재협의로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	*************	***	2014.12.12.~12.22	2014.12.12~2014.12.29

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 1부(따로붙임).  끝.