함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	차수별 금액변경 시행(2014년 강남수도사업소 관내 수도계량기 교체 공사)

우리 사업소에서 시행중인 『2014년 강남수도사업소 관내 수도계량기 교체공사(단가계약)』에 대하여 아래와 같이 차수별 금액을 변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 강남수도사업소 관내 수도계량기 교체 공사(단가계약)

나. 계약업체 : 국현종합건설㈜ 대표 김순희

다. 계약기간 : 2014.07.04 ~ 2014.12.31(1차수)

라. 총계약기간 : 2014.07.04 ~ 2015.06.30

마. 예산과목

- 계량기교체 : 상수도사업비용, 영업비용,배급수비,민간이전,민간위탁대행사업비

- 역류방지밸브설치 : 상수도사업비용, 영업비용,배급수비,수선교체비,기타교체비

바. 차수별 금액 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
총부기금액	309,764,970원	309,764,970원	변경없음
금차(1차)금액	215,085,000원	110,133,000원	감 104,952,000원

사. 차수별 금액 변경사유 : 계약금액 증․감사항 발생

붙임 : 1) 2014년 계약내역서 1부.

2) 합의서  1부. 끝.

주무관	정영환		현장민원과장	이수길		강남수도사업소장	12/22 代김형기
협조자
시행	현장민원과-19706	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡2동459-4) 강남수도사업소 본관 1층 현장민원과	/
전화	02-3146-2962	/전송		/	toncar9@seoul.go.kr	/	부분공개(6)