투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 및 준공기한 연기(2014년 센터내 시설물유지보수공사)

1. 우리센터에서 시행하고 있는“2014년 센터내 시설물유지보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 센터내 시설물유지보수공사

나. 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28

다. 도 급 자 : 한북이앤씨(주)  대표 박희준

라. 변경사유 : 외곽산책로 정비, 시공수량 증․감, 신규공종 추가

마. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

바. 공 사 비

구 분	당초금액	변경금액	증․감	비 고
총공사비	427,634,000	812,279,190	증384,645,190
도 급 비	334,724,000	674,777,640	증340,053,640
관 급 비	90,125,760	137,501,550	증 47,375,790
이 설 비	2,784,240	-	감 2,784,240

아. 준공기한

1) 당초 : 2014. 12. 31

2) 변경 : 2015. 2. 28

첨부  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 관련보고서 각1부.  끝.

주무관	김민호		시설팀장	권순회		물재생과장	김일운		난지물재생센터소장	12/22 정흥순
협조자	주무관	정충모		관리과장	김웅남
시행	물재생과-4230	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8580	/		/	대시민공개