투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	한강공원 자전거도로 유지보수공사 계약변경 의뢰

1. 시설관리과-3590(2014.12.19.)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행하고 있는 한강공원 자전거도로 유지보수공사에 대하여 별첨과 같이 설계변경 하였기에 아래와 같이 계약변경 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 한강공원 자전거도로 유지보수공사

나. 공사위치 : 한강공원 전체

다. 공사개요

- 아스팔트 포장 14a, 차선도색 4,620m, 교통표지판 49개, 경계석 설치 240m 등

라. 공사기간 : 2014.5.20. ~ 2014.12.30

마. 도급자 : ㈜남경산업개발  이원근

바. 변경 내용

1) 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	284,261,000	534,261,000	250,000,000
도 급 비	194,261,000	345,261,000	151,000,000
관 급 비	90,000,000	189,000,000	99,000,000

2) 준공기한 연기

당 초	변 경
2014. 5. 20. ~ 2014. 12. 30	2014. 5. 20 ~ 2015. 2. 17

사. 변경사유

- 잠실선착장앞 올림픽대로 진입로 개선공사 추가 및 겨울철 공사로 인한 공기 연장

- 작업지시에 따른 시공물량 변경 등

아. 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 자전거도로 유지보수

시설비 (도급비 증액 : 29,000,000원)

- 도시교통체계 및 소통개선, 도시고속도로 소통 강화, 도시고속도로 기능개선

시설비 (도급비 증액 : 122,000,000원)

따로붙임 : 1. 설계변경 시행품의 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 관련 방침서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	안덕용		주무관	유충현		시설관리과장	12/22 박희철
협조자	주무관	이나영
시행	시설관리과-3599	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25 (강변북로 257)	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	ahndy@seoul.go.kr	/	부분공개(5)