투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시철도공사사장
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 변경 승인요청 회신(화곡역 에스컬레이터설치)

1. 시설지원단-17009호(2014.12.19.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 화곡역 외부 에스컬레이터 설치에 따른 원인자 부담공사 변경 승인요청에 대해 아래와 같이 회신하오니 공사 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 화곡역 외부 에스컬레이터 설치에 따른 교통안전

시설물(노면표시) 설치공사

나. 공사기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.27.(당초)

2014.01.01 ~ 2015.05.27.(변경)

다. 공사감리 : ㈜트래픽스(당초) -> 서울도시철도공사(변경)

라. 원 인 자 : 서울도시철도공사

마. 변경사유 : 지장물이설공사 지연에 따른 연장

바. 회신내용

1) 변경 사항에 대해 기 회신한 승인조건 및 2014년 서울시 노면표시 시방규정을 준수하여 공사시행하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	백승만		도로보수과장	전결 12/22 김권일
협조자
시행	도로보수과-11633	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7952	/전송	02-2657-7960	/	bsmbsmbsm@seoul.go.kr	/	대시민공개