	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	도림천 좌안 복개구조물 정밀안전진단 용역 설계변경(1회) 시행

1. 우리 사업소에서 시행중인『도림천 좌안복개 구조물 정밀안전진단용역』에 대한 설계변경(제1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 도림천 좌안 복개 구조물 정밀안전진단 용역

나. 용역기간 : 2014. 4. 23 ~ 2015.2.16

다. 도 급 자 : (재)한국건설품질연구원 대표  김인식

라. 설계변경 내역                              (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총 용 역 비		190,650,000	207,783,000	17,133,000
도급비	공 급 가 액	173,318,182	188,566,364	15,248,182
	부가가치세	17,331,818	18,856,636	1,524,818
	자문료	-	360,000	360,000
	계	190,650,000	207,783,000	17,133,000

마. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비 (207,783,000)

* 선금지급사항없음

바. 변경사유 : 재하시험 추가 실시에 따른 도급비 증액

첨부   1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경 도서 1부.

3) 합의각서 1부. 끝.

주무관	이승행		시설보수과장	김권일		강서도로사업소장	12/22 조병준
협조자	주무관	윤신식		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-10202	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7910	/	2ss2hh@seoul.go.kr	/	대시민공개