문서번호	토목부-5190
결재일자	2013.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	교량건설과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
명경출	신갑철	박종웅	이광세		03/26 조성일
협 조

동부간선도로확장 방음벽 설치계획 보고

(동부간선도로확장공사(3공구), 노원구 구간)

2013. 3

서울특별시 도시기반시설본부

(토목부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	노원구청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

동부간선도로확장 방음벽 설치계획 보고

(동부간선도로확장공사(3공구), 노원구 구간)

본 공사구간은 노원구 상계동 아파트 지역에 인접하고 있어 지역주민, 구청장, 지역구 시의원 등으로부터 소음대책 해결 민원이 지속된 구간으로 그간 소음 시뮬레이션 시행, 방음벽 관련 주민설명회 개최(2회) 및 서울시 디자인심의(3차) 결과를 반영하여 방음벽 설치계획을 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

○ 공사규모 : 도로확장 4차로→6차로 연장 2.25km

○ 도 급 비 : 47,175,590천원

○ 공사기간 : 2008. 2. 15 ~ 2013. 12. 31

○ 시 공 사 : 세원건설(주)

○ 감 리 사 : 동부엔지니어링(주)외 1개사

□ 추진경위

○ 2011. 01. 18 : 주민설명회 개최(1차)

○ 2011. 05.    : 소음영향 시뮬레이션 시행

○ 2011. 06. 19 : 주민설명회 개최(2차)

※ 주민설명회 결과

- 방음터널이나 반터널 등은 중랑천 하천을 침범하여 하천점용허가가 사실상 불가하고 타지역과의 형평성 차원에서도 수용하기 어려움

- 공정추진상 우선 추진이 필요한 수락고교~은빛아파트 약 300m 구간을 시범시행후 소음영향 효과를 분석하여 지역주민 설득 잔여구간 공사추진

○ 2012. 10. 24 : 서울시 디자인심의(1차)

○ 2012. 11. 07 : 서울시 디자인심의(2차)

○ 2012. 11. 21 : 서울시 디자인심의(3차)

※ 디자인심의결과

- 아파트 근접구간은 수직 6m+꺽기 2.0~5.5m 투명 방음벽을 최소로 적용하고

- 기타구간은 수직 3~6m 투명방음벽 적용

- 저소음포장, 과속방지카메라 설치 등 소음저감효과 방안 적극 적용

□ 방음벽 설치(안)

□ 문제점

<차로조정 구간>

○ 차로조정 구간(상계주공 1~3단지, 10~11단지)에 당초 설계시 방음벽은 설계에 미반영 되었으며

○ 지역주민, 노원구청, 지역구 시의원 등이 지속적으로 교체를 요구하여 소음영향 시뮬레이션을 시행한 바 동부간선도로 확장후 편도로 운영되어 교통량이 분산되고 저소음 포장 시행으로 현재보다 소음도가 높지 않은 것으로 조사되었으나 소음기준에는 만족하지 못함

○ 또한 현재의 방음벽이 노후되어 소음 차단효과가 거의 없는 상태이며 석면을 함유하고 있는 방음벽으로 시민고객의 건강과 주변 환경개선 차원에서 방음벽 교체가 필요함

<6차로 확장구간>

○ 2차에 걸친 주민설명회 개최결과 지역주민과 노원구청에서는 방음터널 또는 반터널을 요구하고 있으나 제반 여건상 수용이 어려움

○ 소음영향 시뮬레이션 결과 확장후 디자인 심의(안)으로 방음벽 설치시 현재보다 소음도가 개선되는 것으로 조사되었으나 10층이상에서는 소음기준을 초과하고 있어 지속적인 주민설득 필요

○ 당초 설계시 일부구간에만 방음벽 설계가 반영되어 추가예산 확보 필요

□ 방음벽 설치 검토(안) : 별첨

□ 소요예산 검토

구 분	규 모	개략공사비(백만원)			비 고
		계	반영	추가소요
계	L=3,690m	17,923	1,924	15,999
차로조정구간	H=6m L=1,410m	4,485	-	4,485
6차로 확장구간	H=6m L=580m H=6+꺽기2~5.5m L=1,200m H=3~4m L=500m	13,438	1,924	11,514	기 설계반영 H=11~15m L=412m

□ 조치의견

○ 본 공사구간은 대부분 아파트 지역에 인접하여 지역주민, 자치구청 등이  지속적으로 소음대책을 요구한 지역으로 방음시설 개선이 필요하므로

○ 서울시 디자인심의(안)으로 전구간에 대한 상세설계를 시행하고 예산여건을 고려하여 단계적으로 공사추진함이 타당할 할것으로 사료됨

- 6차로 확장구간은 공정상 시급한 구간(약 400m)에 대하여 우선 확보된 예산으로 시범시공후 주민참여하에 소음측정 및 영향 분석하여 주민설득 및 단계적 공사추진

- 편도구간(상계주공 1~3단지, 10~11단지)은 당초 설계에 미반영된 구간으로 주관부서(도로계획과)와 협의하여 예산확보후 공사추진 검토

○ 방음벽 상세설계는 시공사(세원건설)로 하여금 방음벽 전문업체를 선정하여 시행케 하고 차후 설계변경 협의, 본부 설계변경 자문을 거쳐 설계변경에 반영코자 함

첨 부 : 방음벽 설치(기초형식) 검토(안) 1부. 끝.