함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 및 차수별 금액변경 시행(2014년 노원구 관내 급수공사-1차)

우리 사업소에서 시행 중인 [2014년 노원구 관내 급수공사(단가계약)]에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 차수별 금액변경을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2014년 노원구 관내 급수공사(장기계속단가계약)

2. 시 공 사 : 창협건설(주)  대표 강인제

3. 공사기간 : 2014. 7. 2 ~ 2015. 6. 30

4. 계약금액 변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 부기금액	656,823,000	656,823,000	-
1차 부기금액	450,000,000	301,460,000	감) 148,540,000
2차 부기금액	206,823,000	355,363,000	증) 148,540,000

5. 설계변경 사유 : 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 계약금액 변경

6. 예산과목 : 상수도사업비,영업비,급수공사비,신설공사비

상수도사업비,영업비,배급수비,수선교체비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

첨 부 : 1) 설계변견 심의결과 보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	정기성		지방시설사무관대우	이승완		급수운영과장	김수영		북부수도사업소장	12/22 이종백
협조자	주무관	김종필토		주무관	한경란		계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-23741	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3367	/전송	02)3146-3389	/		/	부분공개(5)