문서번호	생태공원과-2978
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
김일문		최병언	12/23 차광재
협 조

설계변경 보고
(한강도심생태공원확충공사건설폐기물처리용역

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

한강사업본부 공원부

설계 변경 보고

우리본부에서 시행중인 『한강도심생태공원확충공사 건설폐기물처리

용역-2차 및 총차』에 대한 감독부서로부터 설계변경보고서가 접수되어 검토하고 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

⇒서울시 시설관리공단 공사감독3처-12982(‘0414.12.22)

용역개요

용 역 명 : 한강도심생태공원확충공사 건설폐기물처리용역

용역규모 : 건설폐기물운반 및 처리(폐콘크리트,폐아스콘,기타건설폐기물)

용역기간 : 2014.4.21~2015.3.31(총차‘13.9.23~’15.9.22)

계 약 자 : 주식회사녹색사람들(처리), ㈜강북공영(운반)

감독부서 : 서울특별시 시설관리공단

용역 변경현황

금액 및 기간변경

(단위:원)

구 분	변 경 내 용						비고
	총괄	1차	2차			장래
			당초	변경	증·감
용역비	140,657,000	50,120,000	24,050,000	22,682,000	감1,368,000	66,487,000
용역 기간	‘13.9.23.~ ‘15.9.22	기준공	‘14.4.21~ ’15.3.31	변경없음		~ ‘15.9.22

변경사유 : 본공사 콘크리트 및 아스콘 철거수량 변경에 따른 폐기물 운반 및 처리수량 증·감

수량변경내용(2차)

공 종	내 용	당 초	변 경	증감	비고
건설 폐기물 운반 및 처리	· 폐콘크리트 운반 · 폐아스콘 운반	545㎥ 156㎥	464㎥ 197㎥	감81㎥ 증41㎥
	· 폐콘크리트 처리 · 폐아스콘 처리	1,254톤 365톤	1,066ton 452ton	감188ton 증87ton

예산과목

한강생태계회복(복원), 한강생태공원확충(서래섬주변), 반포한강공원생태공간조성,시설비(100-401-01)

조치의견

상기 변경내용과 같이 폐기물 정산분에 대하여 설계변경(정산) 시행

하고자 함.

붙임 : 설계변경도서 1부.   끝.