문서번호	토목부-25426
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상근		이동훈	12/23 노우성
협조

설계변경 검토보고(전체 3회, 제2차 3회)

『신사사거리~고양시계간 도로개설공사』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

「신사사거리~고양시계간 도로개설공사」

설계변경 검토보고(전체 3회, 제2차 3회)

우리 본부에서 시행중인 『신사사거리~고양시계간 도로개설공사』 책임감리원으로부터 설계변경 요청이 있어 이에 대한 검토 보고입니다.

1		관련근거

❍ 신명감 2014-1217호(‘14.12.17.) : 공사설계변경(전체3회, 2차3회) 도서 제출

2		공사개요

❍ 공 사 명 : 신사사거리~고양시계간 도로개설공사

❍ 위    치 : 은평구 신사동 덕산중학교~고양시 향동동간

❍ 규    모 : 도로개설 폭 25m(4차로), 연장 867m(터널 2개소)

❍ 공사기간

- 전  체 : 2012.12.27. ~ 2015.12.26.

- 제2차 : 2013.12.27. ~ 2014.12.31.

❍ 도 급 비 : 24,014백만원

❍ 시 공 사 : (주)현대건설

❍ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사

3		실정보고 내용

❍ 암판정에 따른 토공수량 변경 및 매각과, 그간 설계변경사항이 발생되어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

❍ 설계변경 내용

- 도급비 현황

【금액 단위 : 천원】

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
전 체	24,014,291	24,014,291	변동없음
제 2 차	11,495,000	11,713,880	증218,880

- 주요변경사항 : 세부내역 별첨

연번	구 분	변 경 사 유 (요약)	공 사 비 (백만원)
1	암판정 (토목부-23320(‘14.11.26))	총3차에 걸쳐 실시한 당현장 종점부(서울측) 암판정 결과를 반영한 토공수량 변경	증)720
2	덕산중학교 회차로옹벽 (토목부-19198(‘14.10.06))	덕산중학교측 학습권침해방지 및 안전관리를 위해 기존옹벽 존치하고자 대체공법을 적용	증)276
3	방수쉬트 부착형앵커 (토목부-23573(‘14.11.28))	라이닝콘크리트의 품질확보 및 시공중 철근탈락에 의한 안전사고 방지를 위하여 방수쉬트 부착형앙카 설치	증)73
4	초기점검 (토목부-18615(‘14.09.25))	누락된 초기점검비 내역에 반영	증)60
5	성암로 토사운반 (토목부-9961(‘14.05.26))	사토장을 당초 수도권매립지에서 인근 성암로 현장으로 변경	감)16
6	ASP유제 (토목부-18614(‘14.09.25))	설계에 누락된 아스팔트 유제(RSC-3,RSC-4)를 내역에 반영	증)13
7	암매각	암판정 결과에 따라 변경된 암석을 매각	감)536
8	터널내방음벽	총사업비 조정결과에 따른 터널내 방음벽 설치 일부제외	감)590

4		검 토 의 견

❍ 설계변경사항이 승인되었고, 공종에 대한 물량정산등 설계변경을 시행하여 공사추진에   만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 감리단 실정보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 2부.  끝.