문서번호	토목부-25392
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	12/23 노우성

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사외 1개소  -

통합 전면 책임감리용역 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사외 1개소  -

통합 전면 책임감리용역 준공기한 연기 검토보고

동절기 동안 주요구조물 시공계획이 없으므로 안전감리원 철수 및 투입인원 정산에 따라 준공기한을 연기하고자 검토 보고 하는 사항임.

□ 관련 근거

○ 감리용역(6차분) 기간 연기 요청(선사고덕 0420-745호, 2014.12.17.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사외 1개소 통합 전면 책임감리용역(6차)

○ 용역기간 : 총괄 -  2009. 3.16.~ 2015.12.31.

6차분 – 2014. 5.28. ~ 2014.12.31.

○ 용 역 비 : 총괄 3,227,722,000원(6차분 – 432,000,000원)

○ 감 리 사 : 한국건설관리공사, ㈜경화엔지니어링

□ 보고내용

○ 연장사유 : 동절기 기간 안전감리원 철수 및 투입인원 정산에 따른 준공기한 연기

○ 용역기간 연장 내용

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
감리용역6차	2014. 5.28. ~ 2014.12.31.	2014. 5.28. ~ 2015. 1.26.	공기연장 26일

□ 조치 계획

○ 동절기 기간 안전감리원 철수 및 투입인원 정산에 따라 감리금액에 맞추어 준공기한을 연기 하고자 함.

○ 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음.

○ 지체상금부과 여부 : 미부과

붙  임 :  준공기한 연기의뢰서 1부.   끝.