투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통지-레미콘25-24-12(청계천 하류 횡단 차집관거 개선공사)

물재생과-7401(2014.12.19)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 통지합니다.

가. 계약건명 : 레미콘25-24-12(청계천 하류 횡단 차집관거 개선공사)

나. 계약금액 : 금42,015,150원(금사천이백일만오천일백오십원)

(조달수수료 별도 : 금215,530원)

다. 계 약 일 : 2014년  11월  26일 (변경계약일 : 2014년 12월 22일)

라. 납품기한 : 51일 연장

- 변 경 : 2015년  02월  20일

- 당 초 : 2014년  12월  31일

마. 변경사유 : 작업일정 변경

바. 계약업체 : ㈜삼표산업 (대표 홍성원)

(☎ 02-460-7168)

붙임 : 분할납품요구및통지 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	12/23 김홍덕
협조자
시행	관리과-15658	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	대시민공개