문서번호	토목부-25411
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	12/23 노우성

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

2014년 예산 집행계획 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

2014년 예산 집행계획 변경보고

선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사에 대한 2014년 예산 집행 계획 변경에 대한 검토 보고임.

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 폭 2차로 → 4 ~ 6차로, 연장 3.72km,

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

○ 감 리 사 : 한국건설관리공사외 1사

현 황

○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시(서울시고시 제2012-187호, 2012. 7.19.)에 따라 보상계획 고시 이후, 추정 보상비를 2014년도에 확보함.

○ 2014년 사고이월비로 보상을 완료함에 따라 2014년 확보된 대부분의 보상비가 미집행된 상태임.

※ 집행현황

(단위:천원)

공 사 명	예산(재) 배 정 액	예산과목 및 내역	보상비 집행현황	잔 액
선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사	8,224,000	○ 보상비 4,221,000 ○ 공사비 3,941,000 ○ 감리비 62,000	18,643 (수용재결 보상비)	4,202,356

○ 예산재배정 요청(강동 재무과-24829호<2014.12. 1.>)

2014년 예산 집행계획 변경

○ 2014년 확보된 보상비를 공사비로 변경

○ 고덕산 생태육교 구간 등 시공선 변경으로 인한 추가용지 보상비는 도시계획시설(도로)변경하여 2015년 확보된 예산 시설비중 일부를 보상비로 변경하여 집행

(단위:천원)

공 사 명	예산(재) 배 정 액	예산과목 및 내역	변 경	비고
선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사	8,224,000	○ 보상비 4,221,000 ○ 공사비 3,941,000 ○ 감리비 62,000	○ 보상비 18,643 ○ 공사비 8,143,357 ○ 감리비 62,000

※ 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 선사로 ~ 고덕지구간, 시설부대비 및 시설비. 시설비

조치계획

○ 2014년 재배정 예산의 효율적 운영과 사업비가 불용되지 않도록 “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 7차” 설계변경시 보상비를 공사비로 변경 집행하고자 함.  끝.