투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 도로시설물일상유지보수공사 설계변경 시행(최종)

우리사업소에서 2014년 건설사업으로 시행중인 『2014년도 도로시설물일상유지보수공사(강서-전용도로)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년도 도로시설물일상유지보수공사(강서-전용도로)

나. 공사개요 : 단면보수 834.8㎡, 표면보수 921.9㎡ 등

다. 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 2015. 2.28

라. 계약금액 : 628,537,000원

마. 도 급 자 : 청구건설 대표 김진호

바. 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증・감
총 공 사 비	635,000,000	633,152,630	(감)1,847,370
도 급 비	628,537,000	628,210,000	(감)327,000
관 급 비	-	-	-
이 전 비	6,463,000	4,942,630	(감)1,520,370

사. 설계변경사유

- 공사물량 증감에 따른 계약물량 변경 및 신규공종 발생

아. 예산과목

- 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 자동차전용도로교량관리,                   도로시설물일상유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

첨부   1. 설계변경(2회) 내역서 1부.

2. 설계변경시행 검토보고서 1부.   끝.

주무관	김승진		교량보수과장	박병연		강서도로사업소장	12/23 조병준
협조자	주무관	윤신식		계약1팀장	김점선
시행	교량보수과-9143	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1) 237	/
전화	02-2657-7949	/전송	02-2658-3886	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)