투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(1회)-최종

1. 우리사업소에서 시행하는 『2014년 포장도로 교통안전시설(노면표시)설치공사 감리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행코자 합니다.

가. 공  사  명 : 2014년 포장도로 교통안전시설(노면표시)설치공사 감리용역

나. 계약년월일 : 2014. 3. 18.

다. 공 사 기 간 : 2014. 3. 20. ~ 2014. 12. 31.

라. 도  급  자 : ㈜트래픽스  대표  김 희 수

마. 설계변경내역

구 분		설계변경 금액(원)		증․감(원)	비 고
		당 초	변 경
총용역비		13,187,900	10,483,000	감) 2,704,900
도급비	공급가액	11,989,000	9,530,000	감) 2,459,000
	부 가 세	1,198,900	953,000	감) 245,900
	계	13,187,900	10,483,000	감) 2,704,900

바. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 변경설계서 1부.  끝.

주무관	최병수		도로보수과장	12/23 이석재
협조자	주무관	최진규		주무관	박경우		관리단속과장	정수현
시행	도로보수과-11313	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관 2층	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	cbs0656@seoul.go.kr	/	대시민공개