투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 설계변경(전체3회, 제2차3회) 계약 요청(신사사거리~고양시계간)

우리본부에서 시행 중인 『신사사거리~고양시계간 도로개설공사』의 설계변경 (전체3회, 제2차3회)에 따른 변경계약을 요청합니다.

1. 공 사 명 : 신사사거리~고양시계간 도로개설공사

2. 공사위치 : 은평구 신사동 덕산중학교~고양시 덕양구 향동동

3. 공사규모 : 도로개설 폭25m(4차로),  연장867m(터널 2개소 포함)

4. 공사기간 : 2012.12.27. ~ 2015.12.26(전체)

2013.12.27. ~ 2014.12.31(2차)

5. 계 약 자 : ㈜현대건설

6. 예산과목 :

가. 광역교통시설특별회계, 도시기반시설본부 토목부, 도로건설, 광역도로건설(광역교통시설특별회계), 신사사거리~고양시계간 도로개설, 시설비

나. 세입세출외 현금

7. 설계변경 내역

【단위 : 천원】

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
전체3회	도급비	24,014,291	24,014,291	0	내역변경
제2차3회	도급비	11,495,000	12,078,860	증583,860	내역변경

- 공사기간 : 변경없음

- 변경사유 : 현장여건 변동에 따른 물량 증감 사항 설계 반영

첨부 : 1. 보고서 1부.

2. 변경설계서 내역서 (전체3회, 제2차3회) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이상근		교량건설과장	이동훈		토목부장	12/23 노우성
협조자	계약1팀장	김점선
시행	토목부-25506	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 청계천로 8 플네니엄플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2578	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개