투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	잠원2빗물펌프장신설공사 설계변경시행 및 준공기한 연기 의뢰

1. 우리부에서 시행중인 『잠원2빗물펌프장신설공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차2회, 1차2회) 및 준공기한(1차 3회)연기를 의뢰 하오니 조치하여 주시기    바랍니다.

가. 공 사 명 : 잠원2빗물펌프장신설공사』

나. 도 급 비 : 총차 13,565백만원(1차분 : 1,890백만원)

다. 공사기간 : 2013.01.03 ∼ 2015.12.31(1차 2013.01.03 ∼ 2015.02.28)

라. 도 급 자 : ㈜에스트건설 외 1개사

마. 예산과목 : 수방대책사업, 잠원빗물펌프장시설용량증대, 시설비및부대비, 감리비

바. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총차(2회)	13,565,495,000	13,984,495,000	증 419,000,000
1차분(2회)	1,890,000,000	1,890,000,000	변동없음	내역변경

- 변경사유 : 추가 공정(가설방음벽 등) 반영에 따른 변경

사. 준공기한 연기[1차분]

○ 연기사유 : 집단민원에 따른 공사중지로 절대공기 부족

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
1차분(3회)	2013.01.3 ~ 2015.02.28	2013.01.03 ~2014.05.31

1) 연기사유 귀책소재 : 서울시도시기반시설본부

2) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차 및 1차) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	12/23 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-13745	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 2층	/
전화	02-3708-8773	/전송	02-3708-8756	/	bhl923@seoul.go.kr	/	대시민공개