함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2014년 은평구관내 상수도공사 건설폐기물처리용역)

1. 우리사업소에서 시행하는 「2014년 은평구관내 상수도공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 은평구관내 상수도공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 : (주)조광환경산업개발 대표 조만기

다. 계약기간 : 2014.04.18. ~ 2015.06.30.

라. 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비 및 부대비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)

소방용수시설관리비, 소방용수시설등의설치및관리비, 소방용수시설설치, 시설비

마. 설계변경 사유 : 폐기물량 증․감, 신규공종 및 차수별 금액 변경

바.  금액조정                                                                                                                                              (단위:원)

구분	차수	당초	변경	증․감	비 고
용역비	총공사부기금액	86,042,300	86,042,300	-
	금차	67,000,000	50,679,000	-16,321,000

붙 임 : 1. 설계변경 요약보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 개최결과보고서 1부.

4. 심의의원 결정 의견서 1부.

5. 변경합의서 1부. 끝.

시설관리팀장	천성훈		시설관리과장	박길영		서부수도사업소장	12/23 설동을
협조자	주무관	신동철
시행	시설관리과-34245	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	31463695	/전송	02-3146-3739	/		/	대시민공개