문서번호	도로계획과-16881
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	민자사업팀장	도로계획과장	시설안전정책관
김정식	정회원	형태경	12/23 한제현

준공기한 연기 보고 (서부간선지하도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 타당성조사 및 기본계획용역)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

준공기한 연기 보고서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 타당성조사 및 기본계획 용역

나. 계 약 자 : ㈜유신 외 1

다. 계약금액 : 금사억이천육백팔십만원정(￦426,800,000-)

라. 계약년월일 : 2013. 9. 23.

마. 착수년월일 : 2013. 9. 24.

바. 준공예정일 : 2014. 12. 28.

2. 보고내용

위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 연기 준공기한 : 2015년 2월 28일

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 친환경공간 확보방안 재검토 및 종합기본계획 수립 등 추가기간 소요로 절대공기 부족

2014. 12.

보고자 : 임기제지방시설주사  김 정 식