함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[북부수도 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관 정비공사]

1. 우리사업소에서 시행중인 『북부수도 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관 정비공사』건에 대한 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약사항

계약건명	계약업체		계약일자	계약금액(원)	비고
	상 호	대 표 자
****************************	*******	***	**********	*************

나. 계약변경 사항 : 준공기한 변경

- 당 초 : 2014. 12. 31

- 변 경 : 2015. 06. 23

다. 연기사유 : 동절기굴착통제 등으로 인한 절대공기 부족

라. 귀책소재 : 북부수도사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 선금 지급  : 미지급

따로붙임 : 1) 준공기한 연기 보고 등 각 1부  2) 합의서 1부 끝.

	북부수도사업소장
주무관	한경란		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	12/23 代조기열
협조자
시행	행정지원과-22807	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	3146-3245	/전송		/	sobongh@seoul.go.kr	/	부분공개